Постановление Правительства Челябинской области от 29 июня 2017 г. N 358-П "О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148-П" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 28 мая, 19 декабря 2019 г., 22 июня 2020 г., 18 мая 2021 г., 3 февраля 2022 г.

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проектной деятельности в Челябинской области.
2. Органам исполнительной власти Челябинской области при разработке и утверждении положений о проектной деятельности в органах исполнительной власти Челябинской области руководствоваться Положением о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденным настоящим постановлением.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области организовать проектную деятельность в муниципальных образованиях Челябинской области, руководствуясь Положением о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденным настоящим постановлением.
4. Внести в пункт 3 раздела I Порядка принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148-П "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Южноуральская панорама, 8 августа 2013 г., N 118; 18 сентября 2013 г., N 139, спецвыпуск N 31; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск N 4 (часть VII); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 января 2017 г.), изменение, дополнив его после слов "включаемые в государственную программу в качестве подпрограмм," словами "приоритетные проекты по основным направлениям стратегического развития Челябинской области в соответствии с положением о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденным Правительством Челябинской области,".
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области	Б.А. Дубровский	

Утверждено
постановлением Правительства
Челябинской области
от 29 июня 2017 г. N 358-П

Положение
о проектной деятельности в Челябинской области
С изменениями и дополнениями от:
 28 мая, 19 декабря 2019 г., 22 июня 2020 г., 18 мая 2021 г., 3 февраля 2022 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проектной деятельности в Челябинской области (далее именуется - Положение) определяет цели и порядок организации проектной деятельности в Челябинской области (далее именуется - проектная деятельность).
2. Термины, используемые в настоящем Положении:
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
абзац утратил силу с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта*, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Челябинской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Челябинской области;
проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов.
3. Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения запланированных результатов при осуществлении деятельности, которая характеризуется как имеющая определенные и достижимые сроки реализации, направленная на достижение конкретных целей и предполагающая координированное выполнение взаимосвязанных действий.
4. Иные цели организации проектной деятельности:
соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
повышение эффективности использования ресурсов;
прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;
повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия между участниками проектной деятельности за счет использования единых подходов проектного управления.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
5. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат региональные проекты (далее именуются - проекты).
6. Настоящее Положение распространяет свое действие на проекты, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области и государственными органами Челябинской области (далее именуются - государственные органы) самостоятельно или с участием по согласованию подведомственных учреждений, общественных и иных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления).

II. Организационная структура управления проектной деятельностью

7. Утратил силу с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 8 изменен с 4 февраля 2022 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 3 февраля 2022 г. N 51-П
 См. предыдущую редакцию
8. Органами управления проектной деятельностью являются:
Комитет при Губернаторе Челябинской области по стратегическому развитию и региональным проектам;
проектные комитеты;
региональный проектный офис, осуществляющий методическое и организационное сопровождение проектной деятельности, функции которого осуществляет Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области (далее именуется - Региональный проектный офис).
В органах исполнительной власти Челябинской области могут создаваться проектные офисы органов исполнительной власти Челябинской области, в муниципальных образованиях Челябинской области - муниципальные проектные офисы.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
9. Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с правовыми актами Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, настоящим Положением и методическими рекомендациями, утверждаемыми Региональным проектным офисом (далее именуются - Методические рекомендации).
10. Утратил силу с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Раздел II дополнен пунктом 9-1 с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
9-1. Проектный комитет является коллегиальным органом, состав которого утверждается куратором проекта.
Председателем проектного комитета является куратор проекта. Заместителем председателя проектного комитета является руководитель проекта.
Проектный комитет:
рассматривает информацию о ходе реализации проектов, утверждает отчеты руководителей проектов о ходе реализации проектов;
запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций документы и информацию по вопросам реализации проектов;
представляет в президиум Комитета при Губернаторе Челябинской области по стратегическому развитию и региональным проектам (далее именуется - президиум Комитета) доклады и предложения по вопросам реализации проектов;
утверждает запросы руководителей проектов на изменение паспортов проектов;
выполняет иные функции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
В целях реализации своих полномочий проектный комитет вправе формировать рабочие группы.
Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.
Заседания проектного комитета проводятся при необходимости.
Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета или по согласованию с председателем проектного комитета его заместителем.
Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета.
В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Мнение члена проектного комитета, изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета.
Проектный комитет вправе принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя проектного комитета.

III. Управление проектами

11. Планирование проектной деятельности осуществляется Региональным проектным офисом путем формирования реестра проектов, планируемых к реализации в течение календарного года либо в течение иного периода, который определяется Губернатором Челябинской области.
Реестр проектов содержит информацию о наименовании проекта, инициаторе проекта, кураторе проекта, руководителе проекта, целях проекта, показателях проекта, результатах проекта, бюджете проекта, сроках его реализации.
12. Управление проектом осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а также с Методическими рекомендациями.
13. Управление проектом предполагает планирование, организацию и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта.
Информация об изменениях:
 Пункт 14 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
14. Управление проектом состоит из четырех этапов: инициирование проекта, подготовка проекта, реализация проекта, завершение проекта.
Информация об изменениях:
 Пункт 15 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
15. Этап инициирования проекта осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.
Предложения по проектам инициируются государственными органами по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями и решениями Губернатора Челябинской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями, проходят процедуру оценки в соответствии с Методическими рекомендациями.
В случае принятия решения о целесообразности реализации инициативы в форме проекта начинается этап подготовки проекта.
16. На этапе подготовки проекта руководитель проекта организует разработку паспорта проекта с учетом Методических рекомендаций.
Паспорта проектов, требующих финансирования, должны быть согласованы Министерством финансов Челябинской области.
Подготовленный паспорт проекта представляется руководителем проекта в Региональный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока его разработки.
Мероприятия, включенные в паспорт одного проекта, не подлежат включению в паспорт другого проекта.
17. Региональный проектный офис рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании паспорта проекта;
2) о необходимости доработки паспорта проекта.
Доработка паспорта проекта осуществляется в срок, не превышающий 14 рабочих дней. Доработанный паспорт повторно направляется в Региональный проектный офис.
18. Утратил силу с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 19 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
19. Паспорта проектов вносятся на рассмотрение президиума Комитета.
Информация об изменениях:
 Пункт 20 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
20. Президиум Комитета рассматривает паспорт проекта на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении паспорта проекта;
2) об отклонении паспорта проекта;
3) о необходимости доработки паспорта проекта.
Паспорт проекта дорабатывается в срок, не превышающий 7 рабочих дней, и направляется на повторное рассмотрение президиума Комитета.
Информация об изменениях:
 Пункт 21 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
21. В случае принятия решения об утверждении паспорта проекта президиум Комитета назначает куратора проекта.
Информация об изменениях:
 Пункт 22 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
22. Утвержденный президиумом Комитета паспорт проекта включается в государственную программу Челябинской области, к сфере реализации которой он относится, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148-П "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области".
Информация об изменениях:
 Пункт 23 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
23. Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденным паспортом проекта и Методическими рекомендациями.
Информация об изменениях:
 Пункт 24 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
24. Завершение проекта осуществляется планово по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта, а также досрочно при принятии соответствующего решения президиумом Комитета.
Информация об изменениях:
 Пункт 25 изменен с 19 мая 2021 г. - Постановление Правительства Челябинской области от 18 мая 2021 г. N 180-П
 См. предыдущую редакцию
25. При завершении проекта руководителем проекта подготавливается итоговый отчет о реализации проекта и вносится в Региональный проектный офис и Комитет при Губернаторе Челябинской области по стратегическому развитию и региональным проектам.
Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается Региональным проектным офисом и утверждается президиумом Комитета.

Примечание:
* Понятие "федеральный проект" используется в значении, указанном в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".